신안군 도로건설공사 추진 현황

(단위 : 억원)

구 분	사 업 명	사 업 량	사 업 비 (22 반영)	사업기간	시공사 (감리사)	공정율	비고
합 계			13,628 (782)
1	비금~암태 도로건설공사	도로신설 L=10.41km	3,995 (1)	-	-	기본 계획	익산청
2	암태 수곡~신석 도로시설개량공사	도로개량 L=9.1km	582 (-)	-	-	기본 계획	익산청
3	압해~화원 도로건설공사	교량2개소 L=13.4km	4,265 (224)	2020.04. ~2027.03.	대우건설 (다산,천마,경호)	10%	익산청
4	압해 신장~복룡 도로시설개량공사	도로확장 L=10.71km	610 (126)	2018.03. ~2023.10	무갑종합건설 (청일)	57%	익산청
5	압해 월포~송공 도로 시설개량공사	도로확장 L=6.06km	324 (63)	2020.06. ~2025.05.	현아종합건설 (용마ENG)	10%	익산청
6	천사대교 관리사무소 신축공사	사무소 신축 (지상 3층)	62 (35)	2021.12 ~2023.06	㈜현대종합건설 (용마ENG)	19%	익산청
7	장산~자라간 연도교 건설공사	도로신설 L=2.87km	1,607 (38)	-	-	기본 계획	전남도 도로교통과
8	지도 태천~선도간 지방도 확포장공사	도로확장 L=4.03km	142 (37)	2019.11. ~2022.10.	진응종합건설 (동아기술공사)	53%	전남도 도로교통과
9	증도~지도간 지방도 확포장공사	도로확장 L=3.3km	196 (35)	2014.06. ~2024.09.	활림건설 (경동ENG)	56%	전남도 도로교통과
10	지도 감정지구 위험도로 개선사업	도로개선 L=1.16km	25 (-)	2019.09. ~2022.08.	풍곡건설 (천일)	80%	도로관리사업소
11	압해 신장~복룡간 우회도로 개설공사	도로확장 L=1.98km	78 (32)	2020.11. ~2023.10.		35%	신안군 안전건설과
12	지도 장동~봉리간 농어촌도로 확포장	도로확장 L=1.10km	20 (3)	2021.12. ~2023.12.		5%	신안군 안전건설과
13	압해 복룡~가룡간 도로정비공사	도로확장 L=1.47km	30 (5)	2019.11. ~2023.06.		15%	신안군 안전건설과