정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	도서개발과	②담당자 (전화번호)		과장 시설5급 김수희 담당 시설6급 송현중 (240-8481)
③정책사업명	안좌 한운↔사치간 연도교 건설사업
④선정기준	대규모 예산이 투입되는 사업 (총 100억 이상 사업)		⑤사업기간		2014.08.06~ 2022.12.30
⑥ 주요내용	∙ 지금까지 추진현황 - 2014. 08 : 기본조사 용역 시행(안전건설방재과) - 2015. 04 : 기본조사 용역 완료(안전건설방재과) - 2015. 05 : 군도8호선 노선인가(변경) 승인(안전건설방재과) - 2015. 07 : 안좌 한운~상사치구간 기본계획수립용역 시행(안전건설방재과) - 2016. 06 : 기본계획수립용역 완료(안전건설방재과) - 2016. 09 : 제4차 도서종합개발계획 수립(한운~사치 연도교 반영) - 2017. 01 : 제4차 도서종합개발계획 중앙부처 협의(행자부, 국토부) ※ 한운~사치 연도교 사업 조건부 승인(국도노선변경을 통한 사업추진 근거 마련) - 2017. 02 : 타당성조사용역 완료(도서개발과) ※ 사업비 : 400억원 ∙ 향후계획 - 2017. 05 : 한운~사치 연도교 진입도로 실시설계 - 2017. 09 : 한운~사치 연도교 진입도로 착공 - 2017. 10 : 제4차 도서종합개발계획 심의회 개최 및 고시