정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	가족센터 건립
② 추진배경	가족센터를 건립하여 다문화가족, 미혼모, 한부모, 조손가정, 기타외국인을 아울러, 보다 나은 사회복지 전달체계 및 가족 인프라를 구축하고자 함
③ 사업개요	○ 위 치 : 신안군 압해읍 학교리 588-7(기존필지), 589-3(신규필지) ○ 사업규모 : 부지면적 8,394㎡, 계획관리지역(자역취락지구) - 기존시설 : 복지회관 1,484.77㎡(지상3층) - 증 축 : 가족센터 3,960㎡(지하1층/지상3층) ○ 사 업 비 : 100억원(국비 50억원, 군비 50억원)
④ 사업부서	교육복지과		⑤ 담당자	복지7급 김성경 시설6급 문영윤
⑥ 선정기준	대규모 예산 투입		⑦ 사업기간	2019.2. ~2021.12.
<그간 주요 추진내용>
○ 신안군 가족센터 건립사업 추진 계획		‘19.02.25.	박우량 군수 박경곤 부군수 김지곤 실장 박운기 과장 박향란 담당
○ 지방재정투자심사 완료		‘19.03.05.	박운기 과장 박향란 담당
○ 공공건축사업계획 사전검토 완료		‘19.03.27.	박운기 과장 박향란 담당
○ 기본계획(마스터플랜) 용역 발주		‘19.04.12.	박운기 과장 박향란 담당
○ 공공건축 사업계획 사전검토 완료		‘19.04.01.	박운기 과장 송현중 담당 박재필 주무관
○ 전라남도 (용역)계약심사 완료		‘19.09.20.	박운기 과장 송현중 담당 박재필 주무관
○ 설계(제안)공모 완료		‘19.11.03.	박운기 과장 송현중 담당 박재필 주무관

○ 기본계획(마스터플랜) 용역 완료	‘19.11.07.	박운기 과장 송현중 담당 박재필 주무관
○ 기본 및 실시설계 용역 의뢰	‘19.11.13.	박운기 과장 송현중 담당 박재필 주무관
○ 전라남도 경관 및 공공디자인 심의 협의 완료	‘19.12.10.	박운기 과장 송현중 담당 박재필 주무관
○ 소규모환경영향평가 용역 의뢰	‘19.12.17.	박운기 과장 송현중 담당 박재필 주무관
○ 해양환경영향조사 용역 의뢰	‘20.03.30.	박운기 과장 송현중 담당 박재필 주무관